임원 및 처․실장 회의자료

【공 무 팀】                                      2006.  7.  18(월)

[ 전주실적 ]

□ 착암기 테이퍼 롯트, 빗트 사용자 실무 교육

o 내  용 : 2006년 기술개선사업(일자형 ⇒ 테이퍼형 전환)

o 일  시 : 2006. 7. 4 ~ 7. 5

o 장  소 : 장성, 도계광업소

o 참석자 : 장성 중앙생산부 부부장외 10명

도계 동덕, 도계생산부 채탄계장외 10명

※ 화순 교육 일정 : 2006.  7.  26.

□ 에어쿨링시스템 일제 점검

o 일    시 : 2006. 7. 3 ~ 7. 6

o 장    소 : 장성, 도계 에어쿨링 설치 전 개소

o 점 검 자 : 독일 Herco社 기술진 및 장성 유체과장

o 점검내용 : 에어쿨링시스템 작동상태

□□여름철 에너지절약 적극 실천 및 홍보 강화□공문 시달

o 일  시 : 2006.  7. 11

o 내  용 : 부문별 에너지절약 추진 내용 및 홍보 강화

□ 시설장비 구입 시행 승인

o 화순 선탄장 V/B Screen 구입 설치 : 각종 × 2대

o 장성 광차 구입 추가 : 3톤 × 50대

o 에어쿨링시스템(열교환기) 구입 : 각종 × 1식

□ 산자위 요구자료 제출

o 심재철의원 : 2003년 이후 수의계약 현황

[ 금주계획 ]

□ 구매조건부 안전등 개발품 현장 적용 시험

o 일 시 : 2006. 7. 18 ~ 7. 19(2일간)

o 규격 및 수량 : 각소 × 20등(충전기 및 충전대 포함)

□ 장성 제 1수갱 Skip Digital화 작업 시행

o 설치 세부 공종

구 분	내 용	비 고
디지털장비 설치	큐비클 기본장비외 6종 및 각종 조작 케이블 포설	7. 17 ～ 7.23(7일)
시 운 전	감시장치 설치 및 무동력, 동력 시험	7. 24 ～ 8. 6(14일)
운전원 기술교육	조작방법 및 응급조치 요령	8. 7 ～ 8. 11(5일)

※ 설치 시운전 소요일자 : 2005. 7. 17 ~ 8. 11(26일)

- 수갱 정지 기간 : 2006. 7. 29 ~ 8. 6(9일)

□ 시설장비 구입 시행

o 화순 압기관 개편공사 : Ø 300 × 240m