임원 및 처․실장 회의자료

【자원기술처】                                     2006.  7.  18(화)

■ 광업소 작업 현황	(2006년 7월 13일 현재)

구 분			장 성	도 계	화 순	계	비고
작업일수 ( 일 )	월간	계획	9	9	9		도계:6/6근무 →10/2휴무
		실적	9	9	9
	년간	계획	132	132	132		화순:5/2근무 →가을체육대회
		실적	132	133	133
생 산 (톤)	월간	계획	25,335	15,300	10,100	50,735
		실적	21,547	14,102	9,653	45,302
		%	85	92	96	89
	년간	계획	358,535	225,100	149,500	733,135
		실적	321,648	209,912	142,689	674,249
		%	90	93	95	92
채탄능율 ( 톤/공 )	계 획		8.270	8.790	8.190	8.390
	실적	월간	7.624	8.819	8.125	8.055
		%	92	100	99	96
		년간	7.789	8.817	8.203	8.151
		%	94	100	100	97

※ 작업실적 분석                                      (2006년 7월 13일 현재)

구 분	장 성	도 계	화 순	계
계	△36,887 (△10.3%)	△15,188 (△6.7%)	△6,811 (△4.6%)	△58,886 (△8.0%)
인원부족	△22,905 (△6.4%)	△18,730 (△8.3%)	△7,364 (△4.9%)	△48,998 (△6.7%)
능률영향	△19,943 (△5.6%)	591 (+0.3%)	237 (+0.2%)	△19,115 (△2.6%)
가동영향	-	△1,465 (△0.7%)	316 (+0.2%)	△1,149 (△0.2%)
외주생산	5,961 (+1.7%)	4,415 (+2.0%)	-	10,376 (+1.4%)

■ 생 산 팀

<전주실적>

□ 민영탄광 작업현황조사 자료작성 및 결과보고

o 종합보고 : 기획처(예산팀 7/13일)

□ 도계, 동덕구역 통기수갱 검토 (국고보조사업)

o 목적 : 동덕구역 11편 하부구역 통기개선 및 유지갱도 축소로 유지 관리비용 절감 및 원가개선

o 내용

- 11편 하부구역 통기수갱 굴착 방안 및 원가절감 방안 검토

- 경제성 검토 등

o 통기수갱 (Raise bore)관련 업무협의

- 광진공 (7/13일)

□ ‘06년 상반기 업무혁신 경진대회 자료검토 제출

o 제출일자 : 7월 10일

□ 광업소 채탄 작업실적 On Line System 구축 검토

o 목적 : 채탄 작업의 On line system화로 소별, 개소별, 막장별 작업실적 필요 즉시 출력 분석, 신속한 현장 작업상황 파악

o 내용 : Network 시스템 구축, 매방 생산계장이 작업실적을 직접 입력

□ 산자위(오영식 의원) 요구자료 제출

o 최근 10년간 무연탄 생산현황 (생산업체별)

o 1톤당 무연탄 생산비용 (제조원가)

<금주계획>

□ ‘07년도 제조원가 기준 손익 분기점 달성을 위한 사업계획 검토 (계속)

o 광업소와 공통적으로 협의

- 생산, 굴진, 보갱 계획, 투자(갱도) 사업계획 등

□ 도계, 동덕하부구역 통기수갱 굴착방안 검토(계속)

o 내용 : 11편 ～ 17편간 수갱(Raise bore)굴착

o 검토방안 : 국고보조 수혜로 동덕구역 통기 및 작업환경개선

- 통기개선에 따른 유지갱도 축소 → 유지 관리비용 절감.

□ 광업소 채탄작업실적 On Line System 구축(계속)

o 광업소 계원실 Network 구축 협의 (경영정보팀)

□ 광업소별 작업실적 분석

o 생산, 능율 등 요인별 사유 분석

- 인원, 능율, 가동, 외주생산 등

o 선행 관리지표 (일채준Set, 탄중갱도 연장M, 막장수)의 기초 작업실적 분석

- 대책 : 부진 광업소 문제점 협의 및 목표 달성토록 독려

■ 개 발 팀

<전주실적>

□ 국회 요구자료 제출

o 심재철의원 요구자료

- ‘05년 이후 발간자료, 연구보고서 (내/외부 용역보고서), 설문조사, 토론회, 공청회, 세미나 목록

o 오영식의원 요구자료

- 석탄공사 연구소의 기술개발 연구실적

(최근 5년간 연구주제 및 성과물)

□ 공기업 R&D 실무협의회 참석 (7월13일 한전회의실)

o 주관 : 에너지, 자원 R&D 기획단

o 참여기관 : 석탄공사 등 9개 기관 24명

o 회의내용 : 공기업 R&D 및 인프라 현황 협의 및 애로사항 등 의견 개진

□ 지식경영 6월분 제안심사

o 레일걸이 제작외 40건

□ 2006년 광산안전시설 국고보조장비 사후관리 대상통보

o 장성 통기승 외 94개 시설 및 장비

<금주계획>

□ 에너지, 자원 R&D기획단 주관 [에너지 기술전망 (ETP) 2050]

간담회 참석 (7월21일)

□ 지식경영 6월분 제안 본심사

o 레일걸이 제작 외 17건

□ 2005년 채택건 3급이하 현장활용 실태조사

■ 공 정 팀

<전주실적>

□ 심재철의원 요구자료 제출

o ‘03년 이후 수의계약 내역

□ 도급(납탄)작업 부가세 면세방안 검토 보고 및 환급절차 추진

o 장성, 도계 도급채탄 계약 관련서류 보완

o 국세청 질의 및 환급신청자료 작성협의

<금주계획>

□ 오영식 의원 요구자료 제출

o 최근 5년간 용역계약 현황 및 경쟁계약 현황, 각 사업별 입찰참가 자격

o 사업별로 입찰에 참여한 기업현황과 계약이 성사된 기업현황

o 경쟁계약 평균 낙찰률

□ 도급(납탄)작업 부가세 면세 및 환급절차 추진(계속)

□ 도급 인력관리 개선방안 검토(계속)

o 비정규직 T/F 와 연계